Ⅱ. 특수공시

	2023 회계연도 특수공시 사업

우리 보령시에서 `23년에 추진한 지역숙원사업, 주차난 해소를 위한 공영주차장 설치, 당면 주요지연 현안사업 등 특수공시사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만 원)

연번	사업부서	사업명	2023년 예산액	사업량	추진상황
1	지역경제과	청소농공단지 근로자 복지센터 신축	1,852	근로복지센터 신축 1동 (연면적 657.86㎡, 지상2층)	100%
2	도시과	도시재생 보령아지트 신축공사	1,961	1동, 지상4층 / 대지면적 436m², 연면적 697.25m²	100%
3	도시과	원도심 복합업무타운 건립공사	6,838	2동, 지하1층/지상4층, 연면적 12,534.4㎡	30%
4	도로과	명천~시청간 도시계획도로 개설공사	1,000	도로개설 L=1.66km, B=25m	40%
5	도로과	대천~죽정동간 도로개설공사	2,455	도로개설 L=610m, B=12m	100%
6	도로과	옥갓티 쌈지주차장 조성	480	주차장 조성 A=272m2	30%
7	교통과	동대3통 공영주차장 조성	800	공영주차장 조성 A=519㎡(19면)	100%

2023회계연도 특수공시 사업 현황

청소농공단지 근로복지센터 신축

○ 청소농공단지 내 편의시설 및 운영시설이 전무한 실정으로 단지 내 근로복지센터 신축으로 근로자 정주여건 개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 보령시 청소면 장곡리 1174번지 일원

○ 사 업 량 : 근로복지센터 신축 1동(연면적 657.86㎡, 지상2층)

○ 사업기간 : 2023. 6. ~ 2024. 4.

○ 총사업비 : 2,502백만원(도비 640, 시비 1,862)

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2023년 말 기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비
총 사업비	2,502	-	640	1,862	2,502
기 투자 예산액	650	-	640	10	650
2023년 예산액	1,852	-	-	1,852	1,852
2024년 이후 예산액	-	-	-	-	-

□ 추진상황

○ 2022. 11. : 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2023. 01. : BF 예비인증

○ 2023. 05. : 계약심사 및 일상감사 완료

○ 2023. 06. : 공사 계약 및 착공

○ 2024. 04. : 공사 준공

□ 기대효과

○ 농공단지의 시설관리, 유지보수, 행정지원 및 보안관리 강화

○ 기업 및 근로자의 정주여건 향상

□ 위 치 도

□ 사진자료

담당부서: 지역경제과	담당자: 고석원 (☏041-930-3731)

2023회계연도 특수공시 사업 현황

원도심 복합업무타운 건립공사

○ 원도심 지역 주민의 행정편의성 및 의료서비스 질 향상을 위해 복합업무타운 건립에 따른 유동 인구 발생과 원도심 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 대천동 170-1번지 외 2필지(170-2, 171)

○ 사 업 량 : 2동, 지하1층/지상4층, 연면적 12,523.4㎡

○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2025. 6.

○ 총사업비 : 441억원[국비 46.6 도비 26.6, 시비 367.8]

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2023년 말 기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비
총 사업비	44,100	4,659	2,665	36,776	14,010
기 투자 예산액	13,735	4,128	1,032	8,575	12,932
2023년 예산액	6,838	531	1,633	4,674	1,078
2023년 이후 예산액	23,527	-	-	23,527	-

□ 추진상황

○ 2018. 06.: 원도심 복합업무타운 건립계획(안) 보고

○ 2020. 07.: 지방재정 중앙투자심사 승인

○ 2020. 12.: 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2022. 05.: 건축허가(협의) 승인

○ 2022. 06.: 전기, 통신, 소방공사 계약완료(11월 20일 착공)

○ 2022. 11.: 건축공사 계약완료(11월 29일 착공)

○ 2023. 11.: 지하1층 흙막이 및 터파기 완료

□ 기대효과

○ 보령 시민들의 문화활동 공간 제공으로 문화복지 개선 및 건강증진

○ 원도심 지역주민의 행정 편의성 및 의료서비스의 질향상

□ 위 치 도

□ 사진자료

담당부서: 도시과	담당자: 장미정(☏041-930-3873)

2023회계연도 특수공시 사업 현황

도시재생 보령 아지트 신축공사

○ 청소년들에게 다양한 콘텐츠를 접하고 기획·개발할 수 있는 공간 제공과 4차 산업과 관련된 문화 체험으로 인재 육성 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 대천동 344-3번지 외 2필지

○ 사 업 량 : 주1동, 지상4층 / 대지면적 436m², 연면적 697.25m²

○ 사업기간 : 2021. 4. ~ 2023. 12.

○ 총사업비 : 2,920백만 원(국 1,899, 도 299, 시 722)

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2023년 말 기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비
총 사업비	2,920	1,899	299	722	2,920
기 투자 예산액	959	619	159	181	959
2023년 예산액	1,961	1,280	140	541	1,961
2024년 이후 예산액	-	-	-	-	-

※ 충남 서남부의 새로운 활력, 新경제 문화 중심지 viva 보령(250억)의 보령 아지트는 단위사업임

□ 추진상황

○ 2020. 03.: 토지 매입

○ 2021. 04.: 실시설계용역 착수

○ 2023. 02.: 공사 착공

○ 2023. 11.: 공사 준공

○ 2023. 12.: 운영조례제정

○ 2024. 07.: 보령시 시설관리공단 위수탁 운영관리 체결

□ 기대효과

○ 3D 프린터 공작실, 1인 미디어실, 댄스교실, 음악창작소, 커뮤니티실 조성으로 문화체험 마련 등

○ 콘텐츠 기획·제작을 위한 교육프로그램 운영 및 멘토링 기회 제공으로 창작, 교육, 소통의 기회 확대

□ 위 치 도

□ 사진자료

담당부서: 도시과	담당자: 강다예(☏041-930-3871)

2023회계연도 특수공시 사업 현황

명천~시청간 도시계획도로 개설공사

○ 도시계획도로 개설사업을 시행하여 도심지 내 균형발전을 촉진하고 도로이용자의 교통편의를 제공

○ 주민의 주거환경과 보행자 안전을 위하여 도로 가로망을 정비

□ 사업개요

○ 위    치 : 보령시 명천동 일원(명천삼거리 ~ 시청후문)

○ 사 업 량 : 도로개설 L=1.66km, B=25m

○ 사업기간 : 2021. 06. 28. ~ 2023. 11. 14.

○ 총사업비 : 21,750백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2023년 말 기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비
총 사업비	21,750	-	-	21,750	17,073
기 투자 예산액	16,750	-	-	16,750	14,020
2023년 예산액	1,000	-	-	1,000	3,053
2024년 이후 예산액	4,000	-	-	4,000	-

□ 추진상황

○ 2018. 07.: 교통시설 안전진단용역 준공

○ 2019. 12.: 도시관리계획(도로, 광장) 결정 협의(도 건설정책과)

○ 2020. 06.: 실시계획인가 승인

○ 2020. 12.: 실시계획인가 (변경)승인

○ 2021. 06.: 공사 착공

□ 기대효과

○ 도심지 내 도로이용자의 교통편의 제공 및 주민의 주거환경 개선

□ 위 치 도

□ 사진자료

담당부서: 도로과	담당자: 박종국 (☏041-930-3941)

2023회계연도 특수공시 사업 현황

대천~죽정동간 도로개설공사

○ 죽정동 지역의 아파트 밀집으로 인한 교통 혼잡 해소

○ 구시가지와의 연결 동선 개설로 구시가지 활성화 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 대천동(대천여중) ~ 죽정동(유성2차APT)

○ 사 업 량 : 도로개설 L=610m, B=12m

○ 사업기간 : 2020. 06. 01. ~ 2023. 11. 21.

○ 총사업비 : 19,670백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2023년 말 기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비
총 사업비	19,670	-	-	19,670	16,856
기 투자 예산액	17,215	-	-	17,215	13,870
2023년 예산액	2,455	-	-	2,455	2,986
2024년 이후 예산액	-	-	-	-	-

□ 추진상황

○ 2018. 03.: 도시관리계획(변경) 결정

○ 2018. 05.: 지방기술심의(충청남도)

○ 2019. 04.: 실시계획인가 승인 및 보상계획 통보

○ 2020. 06.: 공사 착공

○ 2023. 11.: 공사 준공

□ 기대효과

○ 아파트 밀집지역 교통량 해소 및 터널 공사로 인한 구시가지 활성화 도모

□ 위 치 도

□ 사진자료

담당부서: 도로과	담당자: 박종국 (☏041-930-3941)

2023회계연도 특수공시 사업 현황

대천 옥갓티 쌈지주차장 조성공사

○ 대천~죽정간 도로개설로 인해 기존 주차장이 철거됨에 따라 주민 주차난 해소를 위해 마을주차장 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 대천동 144-17번지 외 1필지

○ 사 업 량 : 주차장 조성(A=272m2)

○ 사업기간 : 2023. 12. 12. ~ 2024. 04. 25.

○ 총사업비 : 480백만 원(공사 100 / 보상 380)

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2023년 말 기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비
총 사업비	480	-	-	-	426
기 투자 예산액	-	-	-	-	-
2023년 예산액	480	-	-	480	426
2024년 이후 예산액	-	-	-	-	-

□ 추진상황

○ 2023. 06.: 추진계획 보고

○ 2023. 11.: 실시설계용역 착수

○ 2023. 12.: 실시설계용역 준공

○ 2023. 12.: 공사 착공

○ 2024. 04.: 공사 준공

□ 기대효과

○ 인근 지역주민들의 주차난 해소 및 편의증대

□ 위 치 도

□ 사진자료

담당부서: 도로과	담당자: 박종국 (☏041-930-3941)

2023회계연도 특수공시 사업 현황

동대3통 공영주차장 조성

○ 동대동 상가밀집지역의 주차난 해소를 위해 공영주차장 조성 추진으로 주차난 해소 및 갓길주차로 인한 교통사고 예방 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 보령시 동대동 1406번지

○ 사 업 량 : 공영주차장 조성 A=519㎡(19면)

○ 사업기간 : 2023. 5. ~ 2023. 12.

○ 총사업비 : 800백만 원(특조 100, 시 700)

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2023년 말 기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비
총 사업비	800	100	-	700	754
기 투자 예산액	-	-	-	-	-
2023년 예산액	800	100	-	700	754
2024년 이후 예산액	-	-	-	-	-

□ 추진상황

○ 2023.  5.: 손실보상 완료

○ 2023.  5.: 실시설계 용역 착수

○ 2023.  6.: 실시설계 용역 완료

○ 2023. 11.: 동대3통 공영주차장 조성공사 착공

○ 2023. 12.: 동대3통 공영주차장 조성공사 준공 및 운영관리

□ 기대효과

○ 동대동 상가밀집지역 주차환경 개선에 따른 지역주민 편의제공

○ 갓길주차로 인한 교통사고 예방 도모

□ 위 치 도

□ 사진자료

담당부서: 교통과	담당자: 이재표 (☏041-930-3978)